영천경마공원 1단계 건설공사 - 건축물 미술작품 제작·설치 과업지시서

2024. 4.

영천건설사업단

영천건설사업부

1. 목  적

‘영천경마공원 1단계 건설공사 건축물 미술작품 제작·설치’ 와 관련하여 작품의 제작·설치에 필요한 고려사항과 기준을 정하는 데 있다.

2. 과업의 내용

가. 과업의 범위

1) 실시설계

가) 실제 설치할 미술작품을 실시도면으로 구체화

- 작품 제작 및 설치 시 부수되는 업무와 발주처의 요구사항을 작성

2) 설치개요

가) 영천경마공원 1단계 건설공사 건축물 미술작품 제작·설치

나) 작품설명 부대시설물 설치

다) 조형물 설치에 따른 경관조명(제안시) 및 주변 환경정비

3) 선정된 미술품의 심의 통과 및 건축물 준공을 위한 미술품 관련 서류 및 행정업무 일체

나. 과업기간 : 계약일로부터 2025년 12월 31일까지

다. 주요 추진일정

1) 심의신청 : (‘24. 5월) 경상북도 건축물 미술작품 심의위원회 심의신청

2) 심의 : (‘24. 6월) 경상북도 건축물 미술작품 심의위원회 심의 (변동가능)

3) 제작 : (‘25. 9월限) 심의내용을 반영한 조형물 제작

* (‘24. 하반기) 중간검수 1~4회, (∼‘25. 9월) 최종검수

4) 설치 : (‘25. 10∼12월) 제작 물품 설치

3. 일반사항

본 미술작품은 그 시행 일체를 설계도서 및 본 지침서에 의해 제작 및 설치하여야 함

가. 과업수행자의 의무

1) 과업수행자는 본 과업지시서 내용에서 정하는 바에 따라 과업 내용을 신의와 성실의 원칙에 입각하여  수행하고 정해진 기간 내에 완성하여야 한다.

2) 과업수행자는 발주처의 요구가 있을시 수시보고를 하여야 한다.

3) 과업수행자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 설계를 착수하여야 한다.

4) 과업수행자는 다음의 주요 추진 사항에 대하여 수시로 발주처 또는 감독관과 협의하고 그 의견을 협의하여 실행해야 한다.

가) 과업수행자는 설계에 필요한 관련 자료의 조사 및 수집에 대해 성실히 임하여야 하며, 사전에 자료조사계획을 시행기관과 협의

나) 주요 마감재료 및 기자재의 선정

다) 기본 계획에 따른 설계 및 변경

라) 기타 발주처가 요청하는 사항

5) 보고의무 : 과업수행자는 수행중인 용역과업의 중요내용에 대하여 발주처의 사전 의사결정이 필요한 때에는 발주처에 그 필요성을 보고하여 대책을 강구하여야 하며 아래와 같이 보고 하여야 한다.

가) [착수보고] 과업수행자는 계약체결 후 14일 이내 본 과업에 착수       하여야 하며 착수 시 아래와 같은 착수계 서류 제출 및 착수 보고를 발주처를 대상으로 수행하여야 함

※ 착수계, 추진일정계획, 담당자 명단, 과업총괄책임자 선임계, 예정공정표, 인력투입 계획서, 안전보건관리계획서, 보안각서, 보안대책, 기타 발주처가 요구하는 사항 등 필요한 제반서류 제출

나) [수시보고] 과업수행자는 본 과업의 추진상황에 대하여 발주처의 요구가 있을 시 진척상황 및 추진계획을 보고하여야 함

다) [중간보고] 미술작품심위위원회 통과 및 제작도면 작성 완료 시점, 제작·설치 단계별 계획 완료 시점 각 1회 이상의 중간보고를 수행하여야 함

※ 발주처의 요청 시 과업수행자는 미흡 사항을 즉각적으로 보완 후, 재보고하여야하며, 회의개최 시 발주처가 요구하는 회의장소에 응하여야 한다.

라) [완료보고] 과업 종료 후 과업수행 완료결과에 대하여 발주처에 보고하여야 함

나. 과업수행자의 책임

1) 과업수행자는 발주처의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도 수급인의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업 수행 상 모든 하자에 대하여 과업수행자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 과업수행자는 사업 준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주처의 수정․보완요구가 있을 때에는 과업수행자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

2) 과업수행자는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주처의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성 비치하여야 하며 발주처의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

3) 과업수행자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 진다.

4) 미술작품 제작․설치는 계약금액 증가가 없도록 하여야 하며, 만약 변경사항이 발생할 경우 계약자 부담으로 한다.

5) 과업수행자는 본 미술작품의 설치지역 외에 있는 시설물은 원형대로 보전하여야 하며 손상을 입혔을 때에는 과업수행자 부담으로 원상 복구하여야 한다.

6) 손상을 받은 부분이나 표준이하로 제작 및 설치된 부분은 설계도서대로 계약자가 대체 또는 복구하여야 한다.

7) 계약자는 발주자가 서면에 의하여 본 미술품의 최후 인계를 받을 때까지 계약자 부담으로 관리하며 그 책임을 진다.

8) 계약자는 기한 내 설치를 완료하지 못하여 건축물 사용검사에 지장을 가져올 경우 본 공사 사용검사 지연에 따른 모든 경제적 손실 등을 책임져야 한다.

9) 경상북도 미술작품심의위원회의 심의에 통과되지 못할 경우 또는 낙찰자의 의무를 성실히 이행하지 아니하여 준공기한 내 작품설치가 곤란하다고 판단 될 경우에는 계약을 취소하고 그 동안 소요된 제반비용은 지급하지 아니함

4. 제작 및 설치

가. 제작·설치 전 제작 및 설치 계획을 발주처에 제출하여 협의 후 제작 및 설치하여야 한다.

1) 제작 및 설치계획서는 실시설계 제작도면 및 제작설치내역서를 기준으로 작성하며 발주처의 요구 시 수정·보완해야 한다.

2) 제작·설치 중에도 작품의 안전 보강을 위한 추가사항에 대해 발주처의 요구를 즉시 반영하며 계약자 부담으로 한다.

나. 작품에 대한 수정, 보완이 필요한 경우 발주처의 승인을 받아야 한다.

다. 당선 작품의 시공을 위하여 필요한 경우 관련 전문 기술용역업체 등의 협력 및 참여를 요청할 수 있다.

라. 계약자는 세부공정계획에 따라 제작·설치를 하여야 하며, 계획과 차질이 있을 시는 그 원인과 대책을 발주처에 제출하여야 한다.

마. 계약자는 자재의 사용 및 제작, 설치에 대해 감독관이 적정하지 못하다고 인정할 때에는 재시공 등 필요한 조치를 하고 확인을 받아야 한다.

바. 설계도서 및 과업지침서에 기재되어 있지 않은 사항 및 구조상 세부적인 사항은 발주처의 협의 및 승인을 받아야 한다.

사. 계약자는 품질관리상 필요하다고 인정되는 해당 항목에 대해서는 공인된 기관에 관리시험을 의뢰해야 한다.

아. 제작 및 설치가 완료되었을 때에는 발주처의 지시에 따라 가시설물을 제거하고 청소, 정리하며 발주처의 검사를 받아야 한다.

5. 검  사

가. 미술품 제작 및 설치의 기성 및 준공검사 시에는 계약자(대표자)가 검사를 받으며 검사 결과에 대한 책임을 진다.

나. 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 검사원의 지시에 따라야 한다.

다. 계약자는 설치 완료 후 준공 상황의 실측, 정확한 도면을 작성하여 준공계를 첨부하여 발주처에 제출하여야 한다.

라. 제작 및 설치 후 검사가 불가능한 부분은 해당 부분을 증명할 수 있는 서류(사진 등)를 제출하여야 한다.

6. 공정보고

가. 계약자는 설계도서 및 지침서에 의하여 제작 및 설치에 대한 상세한 계획을 세워서 소정 양식의 공정표를 제출하여야 한다.

나. 공정보고는 서면으로 중간보고 및 완료보고를 해야하며 보고 시에는 공정 및 사진이 첨부되어야 한다.

7. 현장관리

가. 계약자는 제작, 설치현장 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하여 제작 및 설치하여야 한다.

나. 제작 및 설치 현장에 일반인 및 노무자 출입의 감시, 풍기, 위생의 단속, 화재, 도난, 기타의 사고방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

다. 사업 시행중 발생한 폐기물은 폐기물관리법 규정에 의거 계약자는 폐기물처리업체를 통하여 처리하고, 관련 서류를 증빙하여야 한다.

8. 안전관리

가. 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여 유사시에 대한 사전대책을 강구하여야 하며, 유사시에는 피해를 최소한으로 할 수 있는 응급조치를 하여야 한다.

나. 제작 및 설치에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제삼자에 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때, 혹은 그러한 사고 발생의 징조를 발견하였을 때에는 응급조치를 취하고 발주처에 보고하여야 한다.

다. 착수 시에 제출하는 안전보건관리계획 및 사전에 위험성 평가(최초, 정기, 수시)를 통하여 안전한 작업이 이루어지도록 한다

라. 6대 위험작업에 대한 안전작업허가서 및 작업계획서 대상에 대해서는 사전 에 계획(허가)서를 제출 후 승인을 받고 작업을 진행하도록 한다.

안전작업허가서 대상	작업계획서 대상
화기 작업	타워크레인 설치, 조립 해체 작업
굴착 작업	차량계 하역운반기계 등을 사용하는 작업 (지게차, 고소작업대 등)
밀폐 작업	차량계 건설기계를 사용하는 작업 (항타, 항발 등 각각 작업)
고소 작업	교량의 최대 지간 길이가 30m이상인 교량의 설치 해체 변경 작업
전기 작업	전기 취급 작업 (50V 또는 250VA 이상 작업)
중량물 취급 작업	중량물 취급 작업

9. 제반법규 준수

가. 제작 및 설치에 있어서는 산업안전보건법, 근로기준법, 건설산업기본법, 건설기술관리법, 전기공사업법, 기타 관계법규 등을 반드시 준수하여야 한다.

나. 노무자에 대한 제 법규의 운영과 적용은 계약자의 책임 하에 이뤄지고 노무자의 모든 행위에 대한 책임은 계약자에게 있다.

10. 제작 및 설치 일시중지

가. 발주처는 다음 사항에 대하여 제작 및 설치를 일시 중지할 수 있으며 중지로 인한 손해를 계약자 부담으로 한다.

1) 계약자가 설계도서와 상이하게 시공하거나, 발주처의 지시에 응하지 않을 때

2) 제작 및 설치 시 노무자의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

3) 제작 및 설치 시 노무자의 기술 미숙으로 조잡한 시공이 될 우려가 있을 때

4) 관련되는 다른 공사의 진척으로 보아 제작 및 설치의 계속이 부당하다고 인정될 때

나. 기술자 등의 교체

1) 과업을 수행함에 있어 착수단계에서 계약자는 책임기술자를 임명해야 함.

2) 계약자는 발주처가 책임기술자 및 과업에 참여하고 있는 기술자가 사업수행에 불성실하거나 부적당하다고 인정하여 교체를 요구한 때에는 이에 응하여야 함

3) 책임기술자가 일정기간 과업을 수행할 수 없는 사유가 발생한 때에는 그 기간 동안 대리인을 지정하여 과업을 수행하여야 함

4) 계약자는 책임기술자 등의 교체 또는 대리인의 지정 시에는 사전에 발주처의 승인을 받아야 함

11. 설계변경

제작 및 설치 도중 발주자의 방침이 변경되거나 발주자가 부득이 변경을 요구하는 경우에 설계변경을 할 수 있다.

12. 공기연장

천재지변, 발주자의 사정에 의하여 제작 및 설치가 중단되었을 때에는 제작 및 설치기간을 연장할 수 있다.

13. 설계 및 준공도서 관리

가. 모든 설계도서는 해당 관리규정에 준하여 관리하여야 한다.

나. 성과품 및 자료제출 : 각 2부 제출 및 USB 제출

- 성과품 인쇄는 발주기관과 협의·승인 후 실시한다.

연번	목록	규격	비고
1	설계도서(도면, 설계내역서, 수량산출서 등)	A4	합본제출가능
2	사업 관련 증빙서류(자재품질인증서, 세금계산서 등)	A4
3	제작·설치 등 시공 사진(공정별 전·중·후)	A4

※ 별도 보고서 작성이 필요 시 발주기관과 협의하여 작성한다.

14. 지자체 관련 업무

가. 계약자는 지자체에 제출할 별도의 미술작품 설치계획 심의신청서에 필요한 자료제공 등 심의에 필요한 업무를 추진하여야 한다.

나. 계약자는 지자체 심의결과를 미술작품 제작 및 설치에 반영하여야 한다.

다. 계약자는 미술작품 설치 승인과 관련하여 제작 및 설치 중이라도 지자체가 특별한 자료를 요구할 때에는 이에 응해야 한다.

15. 유지관리지침

가. 제작·설치 이후에 작품의 유지관리를 위해 다음의 사항을 포함하여 작성 제출한다.

1) 시설 및 장비의 종류, 목적, 사용방법, 전기 및 기계장비 사양서 요약

2) 주요 점검항목, 점검방법, 공사내용의 보수 및 유지관리계획

16. 특기사항

가. 미술품의 시공범위는 조형물 본체와 좌대 및 기초 등으로 한다.

나. 조형물 등은 구조, 표면처리 등에 있어서 인위적, 자연적 훼손에 대응하여 내구력이 있고 견고한 구조물로서 안전한 배치가 되도록 한다.

다. 이음부는 구조상 결함이 없도록 견고하게 처리하여야 하며, 외관상으로도 미려하게 시공하여야 한다.

라. 작품의 조형적 효과를 고려하여 건축, 토목, 조경 등 관련 공사와 긴밀히 협조한다.(단, 조명을 계획한 경우 계약자 부담으로 한다.)

마. 현장 설치는 설치 전 설치환경 등 제반여건을 정밀 조사하여 운반 등에 차질이 없도록 하며, 특히 주위시설 및 환경공간을 훼손치 않도록 안전시설(가설구조물) 등을 고려하여야 한다.

바. 건축 구조적 기술 등 필요한 부분은 관계전문가의 자문을 받아 시공하여야 한다.

사. 사용재료는 적합한 강도의 내구성을 지니고 있는 것으로서 변색, 변질되는 광물질을 포함하고 있어서는 안된다.(단, 작가 의도에 따라 변색되는 작품은 예외)

아. 작품설명 등을 위한 별도의 부대 시설물은 계약자 부담으로 설치해야 하고 부대시설물의 상세한 사항(형태, 규모, 재료, 설명내용 등)은 발주처와 협의하여 결정한다.

자. 계약자는 사업이 준공된 이후에도 발주처의 사정에 의하여 설계보완 사항이 발생한 경우에는 설계보완 및 관련 부대업무를 수행하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 별도 지급하지 아니함

차. 본 과업 수행중 제출하는 모든 성과품에는 사업 책임기술자가 발주처에 등록된 인감 또는 서명을 날인하여 제출하여야 함

카. 본 설계에 관한 모든 과업은 관계법령에 의한 제 규정 및 계약내용에 적합하게 수행하여야 하며, 관계법령 및 계약문서에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 발주처과 협의하여 처리하여야 함

타. 본 설계 도서의 자료일체, 저작권 및 기타 법률적인 행위의 권한 일체를 발주처의 소유로 함

파. 설계안내 사항

1) 시공 중 설계변경이 최소화 되도록 계획하여야 함

2) 구조전문가에 의한 구조안전계산이 선행되어야 함

3) 작품의 안전성에 문제가 없도록 설계하여야 함

4) 모든 재료는 원칙적으로 산업표준화법에 의한 규격표시의 인증을 받은 것으로서 K․S 표시품을 사용하여야 하며, K․S 표시품이 없는 경우에는 관계법령에 의한 표준품 이상의 시중 최상품을 사용해야 함

5) 특수한 자재를 사용하고자 하는 경우에는 그 사유와 성능, 경제성, 시공성, 사양서 및 기타 필요한 사항을 발주처에 제시해야 함

하. 과업수행자는 하도급 계약을 체결할 경우에는 그 계약을 체결한 날로부터 15일 이내에 발주처에게 보고하여야 한다.

★ 미술작품 설치위치 (사정에 따라 변경될 수 있음)

배치도

설치 위치도